2016 무대기술 [LAB]

- 특수효과기․장치 제작 방안 개발 연구

과 업 지 시 서 (이탈(막)․비산(눈(꽃)가루,낙엽)․손횃불)

2016. 11.

한국문화예술위원회

Ⅰ	과업 개요

1. 과업 명칭 : 2016 무대기술 LAB – 특수효과기․장치 제작 방안 개발 연구(이탈(막)․비산(눈(꽃)가루,낙엽)․손횃불 특수효과기기 제작 방안 연구)

2. 과업 기간 : 계약체결일로부터 2017년 3월 31일 까지

3. 과업 수행 예산 : 26,000,000원 이내

4. 과업 배경

ㅇ 한국문화예술위원회(이하 ‘위원회’)는 기술운영의 트렌드를 활용 및 보급하고자 '무대기술LAB'을 추진함

ㅇ 공연예술작품의 시각적 표현방식 유형에 따라 장면연출의 이미지 구현을 위한 효과기와 장치기술은 다양한 형식으로 요구됨

ㅇ 다방면으로 활용되어지고 있는 특수효과 제작기술 보급과 공연단체 및 지역무대예술전문가 응용 발전시킬 수 있는 기초기술의 체계화가 필요함

ㅇ ‘위원회’가 추진중인 무대예술전문교육 과정의 일환으로 차년도, 교육과정에 ‘특수효과 제작 방법’ 포함하여, 무대 기술을 보급하고자 함

5. 과업 목적

ㅇ 본 과업은 2016년 무대기술LAB의 일환으로 무대예술에 활용되는 기본 무대기술 특수 효과장치와 기술 체계화

ㅇ 특수 효과 기기와 장치기술 제작 교안 및 교육 교재, 연구자료, 무대예술 현장전문교육 프로그램의 교육 자료 활용 및 기초 기술 제작방법의 보급 확대방안 도출

6. 과업 내용

ㅇ 연구개발 효과기기 제작과정 설명서 (도면화)

ㅇ 개별 효과기 제작관련 내역서(재원의 내역서)

ㅇ 워크숍 및 교육자료 강의안 활용을 위한 제작방법

ㅇ 연구개발 효과기기 결과물 (완제품)

7. 과제 진행과정

제작연구의뢰		연구 중간보고		결과제출
ㅇ 업체의 수행경력, 연구제작 등 검토 후 단체 선정 ㅇ 연구 의뢰		ㅇ 제작과정 중간보고 ㅇ 제품 샘플 제출		ㅇ 연구결과보고서 (제작메뉴얼, 설계도, 제품내역서, 제품 등 포함) (‘17.3.31)

ㅇ 위원회 : 연구기본계획 수립, 기획, 연구 프로세스관리

ㅇ 연구기관 : 연구 설계, 품목별 연구 및 연구결과보고서 작성

8. 성과품 제출

종 류	납품기일	부수	비 고
연구제작 중간 보고서	‘17.2.1(수)	1	ㅇ 연구제작과정 중간보고 ㅇ 전자파일(PPT, HWP, PDF 등) ㅇ 위원회와 협의 후 샘플자료 제출
최종 보고서	‘17.3.31(금)	1	o 본 보고서에 요약본 포함 (제작메뉴얼, 설계도 및 회로도, CAD파일, 연구 제품 포함) o 전자파일(PPT, HWP, PDF 등)

Ⅱ	과업 세부 내용

1. 특수효과기․장치 제작 방안 연구

가. 이탈(막)․비산(눈(꽃)가루,낙엽) 효과기기 제작

1) 막 이탈장치

ㅇ 효과 : 막 이탈

ㅇ 규격 : 15cm x 10cm

ㅇ 수량 : 1set(10개)

ㅇ 주재료 : 전자 액츄에이터 유닛, 제어기(리모콘), 연결 브라켓, 전선 및 커넥터 등

ㅇ 주요사항 : 기존 효과 중 줄장치를 활용하나 전자제어장치는 부재한 사항 전자제어로 가능한 막 이탈장치 제작

2) 눈(꽃) 가루 효과 장치

ㅇ 효과 : 눈(꽃) 가루(※ 습자지 활용)

ㅇ 규격 : 60cm x 30cm x 30cm

ㅇ 수량 : 1개

ㅇ 주재료 : 드럼통, 행거장치, 모터유닛 등

ㅇ 주요사항 : 스노우머신(기성제품)은 화공약품으로 인체에 유해하며 소음문제로 사용의 한계, 기존 눈가루 효과는 천을 활용하여 뭉쳐 떨어지는 단점이 있음. 소음이 적고, 넓게 흩날리는 효과장치기 개발

3) 낙엽 효과 장치

ㅇ 효과 : 나뭇잎 낙엽 효과

ㅇ 수량 : 1개

ㅇ 주재료 : DC 소형 솔레노이드 유닛, PLC 콘트롤러, 릴레이 모듈, 전원, 낙엽모양 잎 등

ㅇ 주요사항 : 전자석을 활용하여 나뭇잎 개별 낙하 방식, 무대장치 효과기기로 개별 컨트롤 가능한 장치 개발

나. 불(손잡이 횃불) 효과 표현기기 연구

ㅇ 효과 : 이동가능한 손잡이 형식의 사실적인 횃불모양

ㅇ 수량 : 1개

ㅇ 주재료 : 3V DC Fan, AA건전지 모듈, LED조명, 실크 소재 모양 불꽃, 횃불 막대모형 등

ㅇ 주요사항 : 불꽃의 이동 효과 구현, 이동식 횃불

2. 특수효과기․장치 제작 교안(이미지화) 연구

ㅇ 각 효과기기별 현장 CAD 설계도 및 회로도 제출

ㅇ 효과기 제작 관련 중요부품의 내역과 규격 표기 제출

ㅇ 제작도면

- 조립순서에 맞는 순차적 세부사항 형태 제출(제작과정 이미지화)

ㅇ 설계도

- CAD : 입체도, 평면도, 단면도, 회로도 파일제출(별효과기 입체도 제외)

- 품목별 수량 1부

Ⅱ	참고 사항

1. 일반사항

ㅇ 계약상대자는 최종협상내용에 따른 과업지시서에서 제안한 사항에 대하여 성실히 수행 하여야 함

ㅇ 계약상대자는 계약체결 즉시 과업에 착수하고, 용역 완료 후 결과보고서 및 제작도면 및 설계도를 제출하여야 함

ㅇ 과업지시서 내용에 해석의 의견차가 있을 때는 발주기관과 협의하여 조정함

2. 기타사항

ㅇ 본 지시서에 명기되지 않았지만 과업을 성공적으로 수행하는 데 필요한 사항을 계약 상대자가 추가적으로 제안할 경우 발주기관은 제안에 대해 계약상대자와 논의하여 진행할 수 있음

ㅇ 계약상대자는 본 과업과 관련된 민원 발생 및 내용 수정 등에 대하여 요구 시 즉각 대처할 수 있어야 함

3. 주요 행정 사항

ㅇ 재 위탁은 원칙적으로 허용하지 않음. 단, 연구의 효율적인 추진을 위하여 필요한 경우 용역 발주자의 허락을 득한 후, 과제 일부를 별도 전문기관에 위탁하여 수행할 수 있음

ㅇ 연구책임자는 해당 과제에 실질적으로 참여하여 수행 및 관리하는 자이어야 함.

ㅇ 용역 결과에 따른 모든 산출물의 소유권은 한국문화예술위원회에 있음.

ㅇ 연구수행계획서의 효력

- 연구수행계획서의 작성 내용이 허위로 기재된 경우 계약 후에도 이러한 사실이 밝혀질 때는 용역사업 수행 자격을 박탈함.

- 연구수행계획서에 기재된 내용은 제안 기관과 체결한 계약서에 명시되지 아니한 경우에도 계약서와 동일한 효력을 가짐.

- 한국문화예술위원회(발주자)의 사정으로 인하여 과제 내용의 일부가 변경 또는 취소되는 경우에도 제안 기관은 이의를 제기하지 못함.

ㅇ 본 ‘과업지시서’에 명시되지 않은 사항은 발주자와 용역수행자 간에 협의하여 결정함.

4. 유의사항

ㅇ 용역사업 수행 기관은 본 과업을 발주자와 협의 하에 수행하여야 함.

ㅇ 용역사업 수행 기관은 용역사업수행계획서를 과업지시서와 협상 내용을 중심으로 작성하여 제출하고 발주자가 보완을 요구한 경우 이를 반영하여 제출하여야 하며, 결과에 따라 계약을 체결함.

ㅇ 용역사업 수행 기관은 과업 착수 시 발주자와 1차 협의를 함.

ㅇ 수시보고는 발주자의 요청이 있거나 주요 결정 사항에 있어 협의가 필요할 경우에 함.

ㅇ 용역사업 수행 기관은 추진 계획 및 방법에 대하여 발주자의 변경 요구가 있을 시 이를 적극 반영하여야 함.

ㅇ 용역사업 수행 기관은 중간보고 시 해당시점까지의 중간결과보고서 1부를 제출하며, 최종보고 후 수정 보완 사항이 있을 경우 이를 반영하여 계약기간 만료 2일전까지 완료한 동 「샘플자료」 1부를 발주자에 제출하여 검수를 받아야 함

ㅇ 최종보고서는 계약 기간 만료 이내에 발주자가 제시하는 연구용역 규격 등에 맞추어 연구보고서 파일 1매와 함께 제출함(만일「최종보고서 가 인쇄본」검수 이후 최종보고서 인쇄사이에 추가 보완사항이 있을 경우, 용역사업 수행 기관은 발주자의 요구에 맞추어 이를 반영한 후 인쇄함).

5. 보안 대책

ㅇ 용역사업 수행 기관은 계약 체결일로부터 10일 이내에 보안각서를 제출하고 보안 대책에 만전을 기하여야 함.

ㅇ 용역사업 수행 기관은 과업 수행과 관련한 자료 및 정보에 대해 보안관리에 철저를 기하여야 함.

ㅇ 발주자의 사전 승인 없이 과업 수행과 관련하여 수집하거나 생산한 자료 및 정보를 임의로 유출해서는 아니 되며, 이에 대한 모든 책임을 짐.

ㅇ 용역사업 수행 기관은 용역 완료 후 작성 원고의 보관에 철저를 기하여야 함.  끝.